문서번호	교통운영과-20497
결재일자	2016.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교통안전팀장	교통운영과장
차양호	김세교	10/26 강진동

준공기한 연기보고(교통사고 잦은곳 실시설계용역)

2016. 10

도시교통본부

(교통운영과)

준공기한 연기 보고

2016년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계 용역 시행중 관계기관 추가 협의등에 따른 준공기한 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 용역 현황

용역명	2016년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계용역(강남)	2016년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계용역(강북)
사업개요	우장공원입구등 25개 지점	망우역앞등 25개 지점
계약일	2016.03.02.	2016.02.29.
착공일	2016.03.03.	2016.03.03.
준공기한	2016.10.28.	2016.10.28.
***	*****************	*****************
****	************	************
***	***	***

□ 보고 내용

가. 사업진행 현황

ｏ 2016.3.  : 용역 착수

ｏ 2016.4.  : 현장 조사 및 분석

ｏ 2016.5.  : 설계안 작성 및 유관기관 협의

ｏ 2016.10. : 설계안 경찰청 규제심의 협의(관할 경찰서 재협의 건의)

나. 연기 사유

ｏ 용역 계획안에 대해 심의 진행중 서울지방경찰청으로부터 관할 경찰서등 의견 수렴 요청등으로 준공기한 내 완료가 어려운 실정임

□ 조치 계획

가. 상기와 같이 준공기한 내 용역이 불가함에 따라 준공기한을 연기하여 용역 시행에 만전을 기하고자 합니다.

나. 준공기한 변경

용역명	준 공 기 간		증․감	비 고
2016년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계용역(강남)	당초	2016.3.2 ∼ 2016.10.28(240일)	증 60일
	변경	2016.3.2. ~ 2016.12.28(300일)
2016년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계용역(강북)	당초	2016.2.29 ∼ 2016.10.28(242일)	증 60일
	변경	2016.2.29.~ 2016.12.28(302일)

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

(관련근거 : 지방자치단체 용역계약일반조건 Ⅶ-1-다의 지체상금 미부과사유)

라. 준공기한 변경의뢰 : 재무과

붙임 1. 합의각서 용역별 각 1부

2. 용역 계약서 및 준공기한 변경의뢰서 각 1부.  끝.