문서번호	기전과-11713
결재일자	2016.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 10/27 代윤석주
협조

교통신호기 신설 및 보수공사(1지역 1차)

실정보고사항 검토보고(3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

서부도로사업소

(기  전  과)

교통신호기 신설 및 보수공사(1지역 1차)

실정보고사항 검토보고(3회)

교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-1지역 1차) 업무수행 중에 책임감리가 제출한 1차 작업지시의 실정보고(3회)에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-1지역) 1차 작업지시 실정보고(3회)

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE16A-10-06호(2016.10.20.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-1지역)

○ 공사위치: 서부도로사업소 관내(중구, 서대문구, 용산구)

○ 공사내용: 교통신호기 신설 및 보수 1식

○ 계약금액: 655,000,000원

○ 공사기간: 2016.3.14. ∼ 2016.12.26.

○ 계약업체: ㈜근영이엔씨 대표 이성영

○ 감리업체: 대영유비텍(주)

□ 1차 작업지시개요

○ 작업위치: 용산구 대한의사협회 외 47개소

○ 작업지시금액: 151,614,000원

○ 작업지시기간: 2016.5.2. ∼ 2016.10.31.

□ 실정보고 내용

○ 변경 예상금액: 감 3,100천원(151,614천원 → 148,514천원)

○ 세부내역

- 중구 남대문로 한국은행 주변: 감 4,370천원

․지장물 미이설에 따른 턱 낮춤 미시행으로 횡단보도 미설치로 공사제외

․기초설치 장소가 상가 슬라브로 설치가 불가하여 공사제외

- 중구 신당동 삼성아파트 서측 연등 횡단보도: 증 1,650천원

․제어기 부분품(L.S.U) 필요수량 감소

․보행자작동신호기가 당초 설계내역의 사급에서 신설공사의 서강치안센터     철거품을 재사용 하기로 하였으나 불량으로 당초 내역인 사급으로 설치

- 세브란스빌딩, 중부경찰서 앞, 장충체육관, 충정로역: 감 600천원

․레미콘 소량주문 불가로 지주 기초를 가로등용 기성기초로 변경설치

- 서대문구 독립공원: 증 420천원

․지주기초 및 앙카설치의 설계누락분 반영

- 서대문구 홍은사거리: 감 280천원

․복개천 구간으로 지주 기초를 주입식 케미컬기초앙카로 변경설치

※ 붙임 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에      따라 작업 시행토록 지시하고 추후 정산하고자 함

붙임  감리업체 1차 작업지시 실정보고(3회) 1부.  끝.