함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	계약변경 시행[신정배수지외 1개소 원격감시제어반 제작구매 설치]

우리 사업소에서 시공하고 있는『신정배수지외 1개소 원격감시제어반 제작구매 설치』건에 대하여 아래와 같이 계약변경을 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 신정배수지외 1개소 원격감시제어반 제작구매 설치

나. 계 약 자 : 서우전기(주) 대표 백병육

다. 계약기간 : 2016. 6. 20. ~ 2016. 10. 31.

라. 변경사유 : 신규공정 및 계약물량 증감 발생

마. 계약금액

[단위 : 원]

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총 부기금액	185,323,000	183,835,460	감 1,487,537

바 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비)

붙임 : 1. 변경내역서 1부

2. 합의서 1부

3. 설계변경 검토 보고서 1부.  끝.

주무관	이무규		기전팀장	문용욱		시설관리과장	이병운		강서수도사업소장	10/27 이인걸
협조자	주무관	문정화		행정관리팀장	심정섭
시행	시설관리과-25740	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-4017	/전송	02-3146-4039	/	lmkyu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)