문서번호	박물관과-2487
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	박물관사업1팀장	박물관과장
박기철	김지연	10/27 임원빈

서울공예박물관 건립

도시계획시설 변경결정용역 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

박물관과

서울공예박물관 건립

도시계획시설 변경결정용역 변경계획

사업부지가 북촌지구단위계획구역내로 지구단위계획변경에 대한 내용이 포함되어야 하며, 교통영향평가의 결과가 반영된 후 용역을 종료해야 하므로 용역기간을 연장하여 계약하고자 함

용역개요

□ 용 역 명 :  서울공예박물관 건립 도시계획시설 변경결정용역

□ 계약업체 : ㈜어울림엔지니어링(이승룡), ㈜전엔지니어링(전성기)

□ 계약금액 : 금76,543,860원(금칠천육백오십사만삼천팔백육십원)

□ 계약기간 : 2016. 6.29. ~ 2016.10.31.

추진경위

□ ‘16. 6.29 : 용역 계약

□ ‘16. 7.26 : 건물 현황측량

□ ‘16. 9.28 : 관련부서 협의

□ ‘16.10. 4 : 도시계획예정선 현황측량

□ ‘16.10.12 : 제외부지에 대한 활용계획 제출(풍문여고)

계약변경내용

계약 업체	당 초	㈜어울림엔지니어링, ㈜전엔지니어링
	변경후	㈜어울림엔지니어링
계약기간변경	당 초	2016. 6. 29 ~ 2016. 10. 31
	변경후	2016. 6. 29 ~ 2017. 2. 28
과업내용변경	당 초	이전 과업내용서
	변경후	변경 과업내용서

계약변경사유

□ 교통영향평가를 실시하고 그 결과를 반영하기 위하여 용역기간 4개월 연장

- 교통정책과-21554(2016.10.3.) (붙임2)

□ 대상 사업지가 북촌지구단위계획구역내에 해당되어 지구단위계획 변경에 대한 내용 반영

- 변경내용 : 지구단위계획 변경결정 내용 반영

사전재해영향성검토 대상이 아니므로(붙임3 참조) 과업 및 용역업체 삭제

- 변경사유 : 사업부지가 북촌지구단위계획구역내로 사전재해영향성 검토를 제외하고 지구단위계획변경으로 발주하여야 하나, 사전재해영향성 검토를 포함한 도시계획시설 변경결정용역으로 발주하여 용역내용 변경필요

※ 용역비 재산정결과(붙임4) 기존 계약금액을 초과하나 기존 계약금액으로 용역시행

향후계획

□ 재무과에 계약변경 요청

【붙임】: 1. 계약변경 사유서 1부.

2. 교통정책과 공문 사본 1부.

3. 자연재해법시행령 관련 규정 1부.

4. 용역비 재산정 결과 1부.

5. 합의각서(안) 1부.

6. 과업내용서(변경) 1부.  끝.