함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(암사동 501-3~496-26 외 8개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 「암사동 501-3~496-26 외 8개소 배급수관 정비공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

1) 계약건명 : 암사동 501-3~496-26 외 8개소 배급수관 정비공사

2) 계약업체 : 제이엘피건설㈜ 김미경

3) 계약금액 : 금474,686,170원

4) 계약년월일 : 2016. 4. 29.

5) 착공년월일 : 2016. 5. 9.

6) 준공기한 : 2016. 11. 4.

나. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

1) 준공 연기기한 : 2016. 12. 18.

2) 연기사유 귀책 소재 : 강동수도사업소

3) 지체상금 부과 여부 : 미부과

4) 연기사유 : 작업방법 변경에 따른 유관기관과의 추가 협의기간 등으로 인하여                             공사기간 부족으로 준공기한을 연기코자 함.

붙임 : 준공기한 연기 방침서 및 합의서 각 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김주경		시설관리과장	전결 10/28 남정열
협조자
시행	시설관리과-22087	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	3146-5207	/전송	3146-5239	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개