문서번호	급수운영과-29868
결재일자	2016.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이슬		유명은	10/28 김정수
협조

설계변경 심의 결과보고

(2016년 아리수 직결음수대 설치공사-은정초등학교외 20개소)

2016. 10.

「2016년 직결음수대 설치공사-은정초등학교외20개소」

설계변경 심의 결과 보고

『2016년 아리수 직결음수대 설치공사-은정초등학교외 20개소』와 관련하여 신공종 및 공종별 물량 증,감 사항 발생에 따른 설계변경 심의 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  10.  28.

보고자 : 시설9급  성명 이슬

□ 공사 현황

○ 공 사 명  : 2016년 아리수 직결음수대 설치공사-은정초등학교외 20개소

○ 공사개요  : D=15~40mm, L=1,051m

○ 계 약 일 : 2016. 5. 31.

○ 착 공 일 : 2016. 6. 2.

○ 준 공 일 : 2016. 10. 29.

○ 도 급 자 : ㈜핵광산업 대표 정영섭(☎02-2682-6571)

○ 계약금액 : 금69,242,820원

□ 설계변경 심의사항

○ 심의일시 : 2016.10.28.(금) 15:00

○ 장    소 : 회의실(4층)

○ 심의위원 : 급수운영과장 외 5인

○ 주요 심의내용

- 신규공종 발생

- 현장여건 변화에 따른 물량 증,감

- 설계변경 타당성, 제경비산정 적정여부

- 기타 사항 등

□ 설계변경 금액

구 분	공사 금액(원)		증ㆍ감 액(원)	비 고
	당 초	변 경
도 급 비	69,242,820	70,686,000	증 1,443,180

□ 설계변경 심의 결과

○ 신공종 및 신자재 발생, 단가적용 : 타당

○ 현장여건 변동에 따른 시공물량 증,감 : 타당

○ 설계변경의 계약 및 제경비 산정 : 적정

□ 향후 계획

○ 우리사업소 자체 설계변경 심의결과에 따라 설계 변경을 시행하고자 합니다.

붙 임 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 심의 결과서 1부.  끝.