서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	도시계획시설 변경결정용역 계약변경요청

1. 재무과-31958(2016.6.30.), 박물관과-2487(2016.10.27.)호와 관련입니다.

2. 서울공예박물관 건립 도시계획시설 변경결정용역과 관련하여 아래와 같이 계약변경하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 서울공예박물관건립 도시계획시설 변경결정용역

나. 계약년월일 : 2016. 6.29

다. 용역 기간 : 2016. 6.29 ~ 2016.10.31

라. 용역 업체 : ㈜어울림엔지니어링(이승룡), ㈜전엔지니어링(전성기)

마. 변경 내용

구 분	최초 계약	변경 계약
계약업체	㈜어울림엔지니어링(이승룡), ㈜전엔지니어링(전성기)	㈜어울림엔지니어링(이승룡)
계약기간	'16. 6.29 ∼ '16.10.31	'16. 6.29 ∼ '17. 2.28
과업내용	과업내용서	과업 변경 ※ 관련공문 참고

따로붙임 :  1. 합의각서 1부.(원본 별도송부)

2. 과업내용서(변경) 1부.

3. 계약변경 관련공문 1부.  끝.

	박물관과장
주무관	박기철		박물관사업1팀장	김지연		박물관과장	10/28 임원빈
협조자
시행	박물관과-2493	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-4191	/전송	2133-1447	/	pkc1019@seoul.go.kr	/	부분공개(5)