문서번호	시설과-5796
결재일자	2016.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
조은주	오삼록	나병우		10/28 송인호
협 조
	총무과장		사창훈

2016년도 설계도면 작성용역 계약변경 추진

2016. 10.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

자체시행 설계도면 작성용역 계약변경 추진

시설과-1916호(2016.4.20.)와 관련 『2016년도 자체시행 설계도면 작성용역 연간단가계약』계약건에 대해서 아래와 같이 변경계약 추진하고자 합니다.

1		개 요

□ 계약명: 2016년도 자체시행 설계도면 작성용역 연간단가계약

□ 계약금액: 금 5,830,000원

□ 계약내용: 도면31매(총액 단가계후 과업에 따라 성과품 납품)

□ 계약업체: 지원건축사사무소(대표: 김두환)

□ 계약기간: 2016. 4.19.~2016.10.30.

2		계약변경사항

□ 납품 및 기성내역 : 총 22매 납품완료

○ 2016. 5. 31.  설계도면 20매 납품(기성금: 3,789,500원 지급)

○ 2016.10.27.  설계도면 2매 납품

□ 변경내용

내 용	당 초	변 경	사 유
공사용 도면 작성	31매	22매	자체 설계도면 납품수량 변경

□ 계약금액 변경

구 분	당 초	변 경	증 감
계약 금액	5,830,000원	4,137,000원	감)1,693,000원

작 성 자	경영지원부장 나병우 ☎ 02-742-0105 과장 오삼록 ☎ 0130 담당 : 조은주 ☎ 0123

○ 예산과목: (정책사업)건설공사 설계수준향상, (단위사업) 건설기술 향상교육 및 우수건설관계자수상, (세부사업) 기술용역 자체설계를 위한 도면작성지원, (통계목) 시설비

3		검토 의견

상기와 같이 계약변경하여 용역 완료처리 하고자 함.

붙임: 1. 변경산출내역서 1부

2. 합의서 1부.  끝.