투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사기간 연기 알림

1. ************************************************)호와 관련입니다.

2. 위 호로 3,4,5,7,8차 작업완료보고  및 공사기간 연장 요청에 대한 검토 결과 현재 작업이 완료되지 않은 구간은 시공자 귀책사유가 없다고 판단되어 다음과 같이 공사기간 연기를 알려드리니 기한 내 작업을 완료하고 보고하여 주시기 바랍니다.

- 공사기한 연장

작업지시번호	당 초	변 경	비고
7-2, 7-8	2016.7.21.~2016.10.30	2016.7.21.~2016.11.30
8-3	2016.8.12.~2016.10.30	2016.8.12.~2016.11.30

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	(주) 함박공영 정화숙 귀하,건설사업관리 총괄기술자
주무관	하승환		도로보수과장	10/31 이상호
협조자
시행	도로보수과-5361	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	02-2210-1537	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개