문서번호	총무과-37497
결재일자	2016.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박교관		임철수	10/31 정상택
협조

덕수궁길 보행전용거리 조성 관련

서소문청사 지하주차장 출입구 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  10.

덕수궁길 보행전용거리 조성 관련

서소문청사 지하주차장 출입구 변경계획

덕수궁길 보행전용거리 조성을 위한 서소문청사 지하주차장 출입구위치변경(덕수궁길 → 1동 남측)사업비를 ’17년 예산에 반영 추진하고자함

□ 추진근거

○ “정동 역사재생 활성화사업” 대외 발표 ’16. 10. 12(시장)

- 대한문에서 원형분수대 까지 310m 구간 보행전용 거리조성

- 운영시간 : (기존) 평일 : 11:30~13:30 → (변경) 연중 10:00~17:00

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 중구 덕수궁길 15(서소문청사)

○ 사업내용

- 덕수궁길 기존 주차장 출입구 폐쇄 후 서소문청사 1동 남측으로 출입구 이전

- 정밀안전 진단 후 주차장 출입 램프 신설, 관리사무소 이전 등

○ 사업기간 : ’17. 1 ~ 12월

○ 사 업 비 : 10억원(설계, 감리, 공사비 등)

	≪ 지하주차장 출입구 변경(안) ≫

※ 지하주차장 규모 : 지하 1층, 연면적 1,815㎡, 주차대수 50대

□ 현재까지 추진사항

○ ’16. 10. 12 “정동 역사재생 활성화사업” 대외 발표(시장)

<보행전용거리 추진경과 및 일정 : 보행정책과>

- ’16. 9. 12   덕수궁길 보행전용거리 시간확대 주민설명회 개최

(운영시간 확대 : 평일 11:30~13:30 → 연중 10:00~17:00)

- ’16. 10.  8        : 제2차 보행전용거리 주말 시범운영

- ’16. 12. ~ ’17. 2월  : 남대문경찰서 협의 및 교통안전시설 규제심의

- ’17.  3.  1        : 보행전용거리 운영시간 확대 시행 예정

○ ’16. 10.13 ~ 10. 28 서소문청사 지하주차장 출입구 위치 변경 검토

□ 기대효과

○ 덕수궁길 보행자 전용거리 조성으로 정동지역 가로활성화 유도

○ 정동(역사도심)의 문화와 경관을 담은 열린 시민공간 조성

□ 행정사항

○ 소요예산 : 1,000백만원(’17년 예산 반영)

- 실시설계 : 공사비 1,000,000천원 × 4.91% = 49,100천원

- 주차장 진출입구 변경(주차램프 설치 등)공사 × 1식 = 937,400천원

- 건축감리 : 공사비 1,000,000천원 × 1.35% =13,500천원

○ 발주방법 : 일반입찰

※ 사업발주(시기)는 보행정책과와 “덕수궁길 보행자 전용거리 조성사업” 추진 일정(행정절차)등에 대한 세부협의 후 시행.

붙임 : 사업설명서(서소문청사 지하주차장 출입구 위치변경) 1부.  끝.