투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	(주)동성엔지니어링 대표이사 귀하
(경유)	남산예장자락 재생사업 건설사업관리 책임기술자
제 목	업무지시전(감리원 투입승인)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 계약체결하여 시행중인「남산예장자락 재생사업」과 관련으로

공공재생과에서 시행중인 「문화재 표본조사용역」이 2016.11.30.까지 추진중임에 따라

표본조사에 따른 예측치 못하는 지하매설물 돌발사고 및 폐기물처리등이 수반되어 본사업 철거공사 준공기한을 연기(2016.07.21.~2016.11.30.)하였으며,

3.이에 따라 현재 투입된 건설사업관리용역 감리원에 대하여 아래와 같이 투입 숭인하오니 철거완료된 사업장 관리 및 문화재 표본조사에 차질이 없도록 현장관리감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

가. 투입기간

구 분	성 명	당 초	변 경
책임감리원	박하현	‘16. 8.24~’18.사업종료시	‘16. 8.24~’16.11.30
안전담당 감리원	홍승재	‘16. 8.26~’16.10.24	‘16. 8.24~’16.11.30

나. 향후 투입중지 안내

- 철거공사 및 문화재 표본조사가 2016.11.30.자로 종료됨에 따라 현장

사업추진사항이 없으므로 2017.2~3월경 본공사 착공시 재 투입예정임.

- 기본 및 실시설계 추진에 따른 설계도서 검토 및 행정지원사항은 비상주 감리원을 통해 진행될 수 있도록 조치요함.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	이석근		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	10/31 代이도헌
협조자
시행	방재시설부-16900	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개