문서번호	급수운영과-30015
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
박용석		유명은	10/31 김정수
협 조

배급수관 정비공사 현장 실정보고에 따른 검토보고

2016. 10

‘2016년  「신월1동 223번지외 7개소 배급수관 정비공사」와 관련하여, 시설관리공단으로부터 감독업무 수행 중 발생한 현장 실정보고에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  10.  31.

보고자 : 시설7급   성명  박 용 석

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 신월1동 223번지외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요： D=20~300mm, L=2,453m

다. 공사기간： 2016. 04. 18. ~ 12. 23

라. 공사금액(도급) : 534,617,510원

마. 시 공 사： 민천건설㈜ 대표 김명옥

□ 실정보고 내용 및 검토의견

가. 관련대호 : 공사감독2처-14524(10.28)호

나. 보고내용 및 검토의견

연번	실정보고 내용	시설관리공단 의견	검토 의견	비 고 (관련대호)
1	[6구간] 포장깨기 및 폐기물량 증가	1구간 설계시 포장심도가(t=20cm)였으나 현장굴착결과 포장심도(t=40cm)가 깊어져 추가된 깨기물량 및 폐기물 운반비를 설계변경시 반영예정	1) 당초 설계시 포장심도가 20cm였으나 실제 도로굴착결과 포장두께가 40cm로 현장여건을 반영하여 포장깨기 및 폐기물 물량을 설계변경시 반영조치가 타당함	공사감독2처-14277호
2	[8구간] 분기부 연결방법 변경	당초 8구간 시점부는 기존관 300mm을 절단한후 새로이 부설한 150mm을 연결하기로 하였으나, GIS 도면과는 달리 현장굴착 결과 기존 관로 300mm가 맞은편 관로와 연결되어 설계대로 정자분기 시공이 불가능하여 부득이하게 300/150 부단수 분기하여 연결함	1) 실제 기존관이 GIS도면과 달리 부설되어 있어 아파트등 대규모 단수 및 차량통행문제등 추후 상수도관 유지관리를 위해 해당지점은 정자분기대신 부단수분기(300/150)를 시행하여 기존관을 연결토록 하는 것이 타당하여 추후 설계변경시 반영코자 함	공사감독2처-14293호

□ 조치 계획

- 서울시 시설관리공단에서 「신월1동 223번지외 7개소 배급수관 정비공사』 감독업무        수행중 발생한 실정보고 내용에 대한 검토결과를 시설관리공단에 통보하여 공사시행       에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임. 관련 실정보고 공문 각 1부.  끝.