문서번호	시설보수과-5963
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡	윤승범	10/31 이성재

『건식소변기 설치공사』

현장실정 및 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『건식소변기 설치공사』

현장실정 및 준공기한 연기 검토보고

우리센터에서 시행중인 건식소변기 설치공사와 관련하여 도급자로 부터 현장 실정보고 문서가 접수되어 이에 대한 검토보고임.

1		사업개요

□ 공 사 명 : 건식소변기 설치공사

□ 공사기간 : 2016.10.24.~2016.10.31

□ 도 급 자 : ㈜비오린 대표 고무환

□ 공 사 비 : 4,750천원

□ 공사내용 : 수세식 소변기 3대 건식소변기로 교체설치(본관동 1층)

2		실정보고내용

□ 기존 소변기 지관에 U트랩이 설치되어 있어 요석발생에 따른 배관 막힘 예상

□ 수세식소변기 철거시 바닥타일 일부 훼손 불가피

□ 화장실 바닥 기존 배수구 악취방지 시설 훼손

□ 기존 세면대 하수구 마감 불량

3		검토결과

□ 현장조사결과 기존 소변기 지관에 U트랩이 설치되어 있어 요석발생에 따른 배관      막힘 및 악취발생이 예상되며, 수세식 소변기 철거에 따른 바닥타일, 화장실      바닥 기존 배수구 악취방지 시설 및 기존 세면대 하수구 마감이 불량한 곳       정비가 필요함

□ 추가공종 발생에 따른 공사기간 부족

4		조치의견

□ 도급자로 하여금 우선시공토록하고 이에 소요되는 공사비(1,111천원, (낙찰율      89.962% 적용)는 추후 설계변경 정산처리코자 하며

□ 추가공종 발생에 따른 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 함

- 준공기한 연기

• 당초 : 2014.10.24.~2016.10.31

• 변경 : 2014.10.24.~2016.11.10

- 연기사유 : 추가공종 발생에 따른 공사기간 부족

- 지체상금부과 여부 : 미부과

붙임 : 관련문서 1부.    끝.