투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약의뢰(건식소변기 설치공사)

1. 시설보수과-5963(2016.10.31)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 추진중인 『건식소변기 설치공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 건식소변기 설치공사

나. 위    치 : 본관동 1층 남자화장실

다. 공사개요 : 수세식 소변기 3대 건식소변기로 교체설치

라. 공사기간 : 2016.10.24.~2016.10.31

마. 공 사 비 : 4,750천원

바. 도 급 자 : ㈜비오린 대표 고무환

사. 변경현황

◦ 도급비 변경

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비		4,750,000	5,861,000	증 1,111,000
도급비	공급가액	4,318,181	5,328,181	증 1,010,000
	부 가 세	431,819	532,819	증 101,000
	계	4,750,000	5,861,000	증 1,111,000

◦ 공사기간 변경

• 당초 : 2016.10.24.~2016.10.31

• 변경 : 2016.10.24.~2016.11.10

• 연기사유 : 추가공종 발생에 따른 공사기간 부족

• 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 관련문서 1부.    끝.

	시설보수과장
주무관	최승룡		시설보수과장	10/31 윤승범
협조자
시행	시설보수과-5973	(		)	접수		(		)
우	04809	성동구 자동차3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개