투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 변경 요청(교량용신축이음장치-교량및고가)

우리부서에서 시행중인『2016년 교량 및 고가 일상유지보수공사』에 소요되는 관급자재(교량용신축이음장치) 납품기한을 아래와 같이 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 관급자재 변경 현황

품 명	납품 회사	규격명	물 량			납품기한		납품요구번호	비 고 (사 유)
			당초	변경	증ㆍ감	당초	변경
교량용신축이음장치	대경산업(주)	교량이음장치, DK NFJ-50A, 1,800×90×137mm	70m	70m	-	2016.10.17	2016.11.30	12-16-2-42915-00	-사유:사용시기 미도래 -귀책:성동도로 사업소

끝.

	시설보수과장
주무관	임승민		시설보수과장	11/01 박춘배
협조자
시행	시설보수과-4265	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	02-2210-1558	/전송	02-2210-1549	/		/	대시민공개