문서번호	기전과-8749
결재일자	2016.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		11/01 박심근
협 조
	주무관		이명호

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연장요청 검토보고(왕십리3구역)

2016. 11.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연장요청 검토보고(왕십리3구역)

교통안전시설물 원인자 부담공사(왕십리3구역)의 준공기한 연장요청이 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 왕뉴3재조 제16-458호(2016.10.31.)
→ 교통안전시설(신호) 원인자 부담공사 공사기간연장 건

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사(왕십리3구역)

○ 공사위치 : 성동구 하왕십로 700번지 일대

○ 공사기간 : 승인일로부터 ∼ 2016. 10. 30.

○ 원 인 자 : 왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업조합

○ 시 공 사 : ㈜우진신호

Ⅲ

준공연기 사유

○ 보고내용

장 소	당 초	변 경	변경사유
하왕십로 700번지	- 승인일로부터 ∼2016.10.30.	- 승인일로부터 ∼2016.12.31.	토목공정 지연으로 인한 공기연장

○ 보고자 : ㈜영호E&C 이희정 감리원

Ⅳ

검 토 결 과

○ 감리사 실정보고를 검토한 결과 토목공정 지연 공사지연 사유가 발생하여 준공기한 변경을 승인하고자 합니다.

첨  부 : 원인자부담공사 준공기한 변경요청 1부.  끝.