투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 설치 원인자공사 변경승인 알림(3차) [신반포1차 재건축현장 주변 교통시호기 설치공사(신호)]

1. 신반포1차 재건축주택조합 신1제2016-120(2016.10.27)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 교통신호기 설치 원인자공사 변경요청 사항에 대하여 아래와 같이 변경승인 하오니 당초 승인내용과 관련규정, 지침 등에 따라 공사시행 및 감리업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신반포1차 재건축(아크로리버파크)현장 주변 교통신호기 설치공사(신호)

나. 공사기간 변경

- 당   초 : 2016.6.22 ~ 2016.8.31.

- 1차변경 : 2016.6.22 ~ 2016.9.30.

- 2차변경 : 2016.6.22 ~ 2016.10.30

- 3차변경 : 2016.6.22 ~ 2016.11.30

다. 원 인 자 : 신반포1차 재건축 주택조합 조합장 한형기

라. 변경사유 : 온라인리포트 지연.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	신반포1차 재건축주택조합 조합장 한형기 귀하,(주)영호이앤씨 대표이사 귀하
주무관	김용문		기전과장	11/02 유재옥
협조자
시행	기전과-5761	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5432	/전송	02)3284-5470	/		/	대시민공개