문서번호	전시과-3304
결재일자	2016.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	전시과장	학예연구부장		서울역사박물관장
나신균	박상빈	박현욱		11/02 송인호
협 조
	경영지원부장		나병우
	총무과장		사창훈
	유물관리과장		한은희

기획전시실 전시환경진단 용역

준공기한 연장 계획

2016. 11.

서울역사박물관

(전 시 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

기획전시실 전시환경진단 용역

준공기한 연장 계획

전시환경진단 용역 중간(2차)보고회 결과 전시환경 개선방안 및 기본계획안 에 대한 요청사항이 발생한 바, 준공기한을 연장하여 수준 높은 기획전시 환경을 마련하고자 함

용역개요

○ 용 역 명 : 기획전시실 전시환경진단 용역

○ 계약대상자 : (사)한국문화공간건축학회 (대표 : 임채진)

○ 계약금액 : 43,190천원

○ 용역기간 : 2016. 7. 7 ~ 2016. 11. 2(총 120일)

○ 용역내용 : 기획전시실 및 기증유물전시실 전시환경진단 및 개선방안 제시

- 전시환경 진단

- 기획전시 특성 분석(최근 5년간)

- 국내외 우수사례 분석

- 전시환경 개선(안) 마련

추진경과

○ 2016. 7. 7 : 용역 착수

○ 2016. 7.21 : 착수보고회

○ 2016. 8.26 : 전문가 자문

○ 2016. 9.22 : 중간보고회

○ 2016. 9.30 ~ 10.14 : 부서 검토회의(3회)

○ 2016.10.20 : 중간(2차)보고회

○ 2016.10.26 : 준공기한 연장 요청(관장)

준공기한 연장 검토

○ 연장의 필요성

- 용역 중간(2차)보고회 결과 전시환경 개선방안 및 계획안에 대한        면밀한 검토가 필요하다는 의견과 용역 발주 후 신규 부임(2016.8.12)한

관장 요청사항(수장형 전시, 창고 위치 등) 등 사정 변경 요인을 성과품에     반영하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함

○ 용역기간

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
기 간	2016. 7. 7 ~ 11. 2	2016. 7. 7 ~ 11. 22	20일 연장

※ 용역수행업체에서는 우리 박물관의 추가 요청 사항을 추가 비용 발생 없이         최종성과품에 반영할 것을 약속

○ 계약금액 : 변경 없음

○ 연기에 따른 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 서울역사박물관

- 지체상금 : 미부과

○ 조치계획 : 상기 사유로 준공기한을 20일 연장코자 함

< 중간(2차)보고회 결과 >

· 일  시 : 2016.10.20.(목) 16:00 ~ 17:30

· 참석자 : 관장, 자문위원(유보현 교수, 황보명 과장),

유물관리과장, 전시과 및 유물관리과 학예연구사

· 결  과

- 각 전시실과 함께 전실(도입부)에 대한 개선방안 검토 필요

- 타 사례와 비교를 통해 구체적인 개선방안 제시 필요

- 바닥재료(마루 등)에 대한 검토 필요

- 기증유물전시실 : 수장형 전시 및 창고 위치 등에 대한 구체적인

대안(2가지) 검토 필요

· 향후계획

- 용역 일정은 행정적으로 논의

- 내부 검토회의 및 최종보고회 개최

향후 추진계획

○	2016. 11. 1	계약변경(준공기한 연장) 의뢰 및 전시과 검토회의
○	2016. 11. 4	내부 검토회의(관장, 전시과)
○	2016. 11. 8	박물관 내부 보고(학예연구부, 시설과)
○	2016. 11. 17	최종보고회 (관장, 자문위원, 전시과, 유물관리과)
○	2016. 11. 22	준 공

끝.