문서번호	경제정책과-16819
결재일자	2016.11.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	홍릉클러스터팀장	산업거점조성반장		창조경제기획관
정상진	이남숙	김재진		11/02 代김태희
협 조

회기로 과학 문화의 거리 조성

기본 및 실시설계 용역 추진계획

2016. 11.

경제진흥본부

(산업거점조성반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

회기로 과학 문화의 거리 조성

기본 및 실시설계 용역 추진계획

회기로변 보행 네트워크 연결로 홍릉단지내 소통 강화 및 활력 부여를 위해 개선이 시급하고 단기 조성이 가능한 홍릉초교변 거리 조성을 우선적으로 시행하고자 해당 구간에 대한 기본 및 실시 설계 용역을 추진함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ 홍릉일대 바이오 의료 클러스터 조성 공동 협력 협약서(’15.10.)

- 7. 홍릉일대 창조경제 거점으로서 브랜드 구축(회기로 및 주변 지하철 역사 등을 활용하여 창조경제 과학문화단지로서 정체성을 정립)

❍ 홍릉일대 과학문화 창조의거리 조성 추진계획(‘15.11.)

□ 추진 필요성

❍ 홍릉일대 보행연계 네트워크의 낙후한 보행공간 개선 필요

❍ 매력적이고 활력있는 거리 조성을 통한 기업집적 도모

- 중앙정부 개발계획과 연계한 과학문화 거리 조성

- 다양한 계층의 이용자들이 자연스럽게 유입될 수 있는 활력있는         보행로 구축

□ 추진경위

❍ 홍릉단지 조성 실행방안 연구용역 추진 :    ‘14. 3 ~ ’15.2월

❍ 홍릉 바이오의료 클러스터조성을 위한 공동협력 협약체결 :    ‘15.10월

- 유관 7개기관 대표 공동협력 협약 체결(7개 조항 등)

❍ 회기로 거리조성 디자인용역 실시:              ‘16. 5 ~ 9월

- 경희대학교 산학협력단(현대미술연구소)

❍ 회기로 거리조성 자문회의 개최(3회) :             ‘16. 10월

Ⅱ		용역 시행계획

□ 용역개요

❍ 과 업 명 : 회기로 과학문화의거리조성 기본 및 실시설계

❍ 용역범위 : 회기로 홍릉초등학교 앞(100m)

❍ 용역기간 : 착수일로부터 50일

❍ 소요예산 : 22백만원

※ 조성 공사비 : 356백만원

❍ 예산과목 : 경제정책과, 활력이 넘치는 경제환경 구축, 기업  활동 지원체계 구축, 홍릉창조경제지식단지조성, 시설비(401-01)

❍ 과업의 주요내용

- 조성 구간내 제반현황 자료 수집․분석

- 보행가로 조성을 위한 기본 구상 및 계획

- 보행가로 조성을 위한 기본 설계 및 실시설계

- 디자인 가이드라인 및 설계지침 작성

❍ 시행방법

- 계약방법 : 수의계약

- 근    거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조제5호(추정가격이 5천만원이하의 소액용역사업으로 유사한                        사업을 시행한 경험이 풍부하고 조성사업 이해도가 높은 업체)

Ⅲ		향후일정

□ 추진일정

❍ 기술용역심사(타당성심사) 의뢰(기술심사담당관) :  ’16. 11월

❍ 기본 및 실시설계 계약의뢰(재무과) :              ‘16.11월

❍ 공사 발주 및 시행 :                        16.12. ~ 3월

□ 조성 공정계획

구 분	‘16. 11	12	‘17. 1	2	3
사전단계
	발 주	(용역시행방침 – 기술용역심사 - 수의계약)
용역단계
	용 역 수 행		계약 – 착수보고 – 기본설계 – 자문회의 – 실시설계 – 자문회의 - 용역준공
공사시행
			공 사 시 행

붙 임 : 과업내용서 1부.  끝.