투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연장에 따른 계약변경 의뢰(기획전시실 전시환경진단 용역)

1. 전시과-3304(2016.11.2)호와 관련입니다.

2. 기획전시실 전시환경진단용역과 관련하여 다음과 같이 준공기한을 연장 시행하고자 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약번호 : 20160701184

나. 용역명 : 기획전시실 전시환경진단 용역

다. 계약자 : (사)한국문화공간건축학회(대표 : 임채진)

라. 변경내용

- 준공기한 : 2016. 11. 22까지 연장(20일)

- 계약금액 : 변경없음

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	2016. 7. 7 - 2016. 11. 2	2016. 7. 7 - 2016. 11.22	20일 연장

마. 변경사유

- 용역 중간(2차)보고회 결과 전시환경 개선방안 및 계획안에 대한 면밀한 검토가 필요하다는 의견과 용역 발주 후 신규 부임(2016.8.12)한 관장 요청사항 등 사정 변경 요인을 성과품에 반영하고자 함

붙임 : 1. 준공기한 연장 계획 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	전시과장
★주무관	나신균		전시과장	11/02 박상빈
협조자
시행	전시과-3306	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 (신문로2가)	/	http://www.museum.seoul.kr/
전화	02-724-0150	/전송	02-724-0255	/	nsksk@seoul.go.kr	/	대시민공개