서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행하고 있는 기술용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 개요

- 계약건명: 노들로 일반도로화에 따른 도로개선 타당성조사 및 기본계획 용역

- 계약업체: (주)태조엔지니어링 대표 한명식

- 준공기한 연기: (당초)2016.11.08.→(변경)2016.12.28.

나. 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

붙임   1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	최재훈		간선도로계획팀장	한정무		도로계획과장	11/02 하종현
협조자
시행	도로계획과-15795	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110,서울시청 10층	/
전화	02-2133-8080	/전송	02-2133-0763	/	choijh1007@seoul.go.kr	/	대시민공개