문서번호	기전과-8857
결재일자	2016.11.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		11/03 박심근
협 조
	주무관		이명호

『교통신호기 유지보수공사 1차(연-2구역)』

제5차 작업지시 공기연장 실정보고 검토보고

2016. 11.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통신호기 유지보수공사 1차(연-2구역)』

제5차 작업지시 공기연장 실정보고 검토보고

교통신호기 유지보수공사 1차(연-2구역)의 제5차 작업지시 건에 대하여 공기연장 실정보고가 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 기전과-7073호(2016.09.06.) ‘5차 작업지시’

○ ㈜건영이앤씨 건영 본16-11-01호(2016.11.02.)

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 교통신호기 유지보수공사 1차(연-2구역) 제5차 작업지시

○ 계약자 : ㈜국제공영 대표 김종만

○ 계약금액 : *****************************

○ 계약기간 : 2016. 03. 18. ∼ 2016. 12. 31.

○ 감 리 원 : 책임감리원 조순재

○ 작업기간

구 분	당 초	변 경
5차	2016.09.06.∼2016.10.30.	2016.09.06.∼2016.11.20.

Ⅲ

실정보고 현황

○ 보고내용

구 분	보고사항	비 고
5차	- 지주기초공사 자리 사유지 소송문제로 지주설치 불허 부착대 오제작으로 공기연장 필요

Ⅳ

검 토 결 과

○ 교통신호기 유지보수 5차 작업지시의 공사기간 변경요청에 대한 실정보고를 검토한 결과 부착대 오제작으로 인하여 상기 작업지시에 대한 작업기간 변경을 승인하고자 합니다.

첨  부 : 제5차 작업지시 공기연장 실정보고 1부.  끝.