문서번호	도로보수과-6277
결재일자	2016.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
홍민표		김준섭	11/03 이덕기
협조

불량맨홀 정비대상(3차) 협의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

남부도로사업소

(도로보수과)

불량맨홀 정비대상(3차) 협의결과 보고

우리사업소 관내 불량맨홀 3차분 정비대상에 대하여 맨홀관리기관과 정비 주체 협의 후 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 특별시도상 불량맨홀 정비대상(3차) 사전협의 : 도로보수과-6003(2016.10.24.)

□ 불량맨홀 현황(3차)

○ 정비대상 : 돌출, 침하, 맨홀단차(10mm이상), 맨홀주변 포장불량, 포장구간 매몰

구분	계	하수도	상수도	통신	소화전	기타	매몰
계	352	61	132	110	17	11	21

□ 협의결과

○ 협의기관 : 영등포구청(안전치수과)외 33개 맨홀관리기관

○ 결    과 : 225개소(맨홀관리기관 정비 : 127개소)

구 분	계	도로관리청 정 비	맨홀관리기관 정 비	기타	비고
수 량	352	225	127	-

- 영등포구 및 일부 맨홀관리기관(하수, 통신)의 경우 예산부족 등의 이유로 정비가 시급한       맨홀 위주 자체정비, 향후 예산확보 후 순차적 정비예정.

- 남부 수도사업소의 경우 예산절감을 위해 노후밸브 교체와 병행하여 불량 맨홀(상수)           정비코자 자체정비 희망.

□ 조치 계획

○ 정비물량(225개소) 대해「‘16년 특별시도상 불량맨홀 정비공사(연간단가)」     계약자 ㈜우암건설(대표 고원준)에 4차 작업지시(기간:’16.11.04~11.30) 하며,

○ 금번 작업지시에 따라 당초 계약물량(545개소) 대비 증가분(80개소)에 대해     낙찰차액을 활용하고 추후 설계변경 및 정산코자 하며,

○ 자체 정비시행 예정 기관에 대하여는 11월까지 시행후 정비실적 결과통보토록     안내하고 미이행시 우리사업소에서 추후 정비시행.

○ 노후맨홀(맨홀받침포함)교체가 수반되는 41개소의 경우 맨홀관리기관과 자재수급     관련 사전 협의를 통해 일정에 차질을 빚지 않도록 조치.

붙 임 : 1.불량맨홀 정비 협의결과 리스트 1부.

2.매몰맨홀 위치도(포장구간)  끝.