문서번호	기전과-8834
결재일자	2016.11.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		11/03 박심근
협 조
	주무관		이명호

『교통사고 줄이기사업 교통신호기공사』

전농동사거리 외 1개소 실정보고 검토보고

2016. 11.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통사고 줄이기사업 교통신호기공사』

전농동사거리 외 1개소 실정보고 검토보고

『교통사고 줄이기사업 교통신호기공사(전농동사거리외 1개소)』의 현장실정보고가 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ ㈜트래픽스 TR-개선-1023(2016.10.31.)

→전농동사거리외 1개소 교통사고 줄이기 교통신호기공사-성동 현장실정보고서 제출

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 전농동사거리외 1개소 교통사고 줄이기 교통신호기 공사

○ 계약자 : 은평전기 대표 이영춘

○ 계약금액 : *********************************

○ 계약기간 : 2016. 05. 17. ∼ 2016. 12. 31.

○ 감 리 원 : 책임감리원 장지용

Ⅲ

실정보고 현황

○ 보고내용                                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변경후	비 고
전농동사거리외 1개소	***********	***********	설계오류로 중복기재된 물량변경 현장여건에 맞게 물량변경 신규물량 추가

※감액 : ***********

Ⅳ

검 토 결 과

○ 교통사고 줄이기사업 교통신호기공사(전농동사거리외 1개소)의 실정보고를 검토한 결과 실정보고에 관한 물량변경을 승인하고자 합니다.

첨  부 : 전농동사거리외 1개소 교통신호기공사 실정보고 1부.  끝.