문서번호	도로보수과-10607
결재일자	2016.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
최완		11/03 이석재
협조

2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사 작업지시(4차) 계획 보고

2016. 11.

북부도로사업소

[도로보수과]

2016년 불량맨홀정비공사 작업지시(4차) 계획

공사현황

공 사 명 : 2016년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

공사개요 : 불량맨홀 정비 592개소

공사기간 : 2016.04.21 ~ 2016.12.31

도 급 비 : 565,000,000원

도 급 자 : (주)다현산업 대표 신시종

보고내용

관련근거

⇒ 포장도로 평탄성확보를 위한 불량맨홀정비 추진계획보고(도로보수과-3906, 2014. 5. 9)

⇒ 2016년 맨홀관리 및 정기점검 계획(도로보수과-8513, 2016. 9. 6)

⇒ 불량맨홀정비예산 하반기 재배정(150백만원) 통보(도로관리과-14541, 2016. 9. 13)

불량맨홀정비 현황(2016. 11. 02일 기준)

- 1차 작업 : 대상 204개소(완료 186개소, 유관기관 정비 등 18개소)

- 2차 작업 : 대상 198개소(완료 178개소, 유관기관 정비 등 20개소)

- 3차 작업 : 대상 305개소(완료 100개소, 진행중 205개소)

- 4차 작업 : 대상 295개소(유관기관 사전협의 예정)

누  계  : 완료(1,2,3차) 464개소, 진행중 205개소

금회 작업내용

- 2016년 맨홀관리 및 정기점검 계획에 따라 우선 정비대상인 D,E급(외관조사) 대상으로 평탄성 확보가 시급한 불량맨홀에 대하여 우선적 작업지시로

차량 안전사고 예방 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

· 관내 노후포장도로 정비공사시 노면단차로 매몰된 맨홀

· 각종 불량맨홀로 발생된 민원, 간선도로상

· 맨홀주변 파손, 침하 등으로 평탄성 확보가 시급한 불량 맨홀

- 불량맨홀 주변의 광범위한 파손으로 보수가 필요한 구간은 도로보수를 선행후    (자체 직영반 보수) 맨홀 정비

- 맨홀관리기관에 대하여는 현장확인 및 정비여부와 맨홀 뚜껑․받침(철개) 지원    협조요청, 정비완료후 맨홀정비비 12월경 일괄부과 예정임을 통보

※ 맨홀뚜껑 파손 및 철개노후가 심하여 교체 필요시 맨홀관리기관에 지원요청

작업지시 분야별 구별 현황

구 분	계	종로구	성북구	강북구	도봉구	노원구
합 계	295	269	20	-	1	5
하수도	64	50	12	-	1	1
상수도	121	111	7	-	-	3
전 기	23	23	-	-	-	-
통 신	70	68	1	-	-	1
소화전	17	17	-	-	-	-
매 몰	-	-	-	-	-	-
도시가스	-	-	-	-	-	-

조치계획

상기 보고내용과 같이 불량맨홀에 대하여 유관기관 관리부서에 사전 업무협의

하고 결과에 따라 『2016년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』  업체에

작업지시(4차)하고자 함.

⇒ 작업기간 : 2016. 11. 10 ~ 2016. 11. 30

불량맨홀정비공사 작업내용에 대하여는 향후 예산범위내에서 설계변경 및 정산

처리 하고자 함.

따로붙임 : 불량맨홀 작업조사내역(4차) 1부.    끝.