투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(건설사업관리기술자 변경 및 투입시기 조정 승인)

1.업무지시현장 : 장안교(구교)성능개선공사 (주)삼안

2.작 성 일 자 : 2016-11-01

3.지 시 내 용 :

1) 삼안 장안교 2016 - 200(2016.10.18)호와 관련입니다.

2) 장안교(구교) 성능개선공사의 보행친화적인 명품교량 건설(경관조명 포함)과 사가정길(장안삼거리~전농동사거리) 확장공사 현장여건 등으로 추진공정이 변경됨에 따라,

3) 건설사업관리기술자(비상주) 변경 및 투입시기 등 조정 승인 요청한 사항에 대하여 아래와 같이 변경(조정)사항을 승인하니 건설사업관리 업무수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 투입시기 등 조정(변경) 사유

- 명품교량 건설(경관조명 포함)과 현장 실정을 고려하여 건설사업관리기술자(비상주) 변경 및 투입시기 등 탄력적 조정

나. 승인내용

- 건설사업관리기술자(비상주) 변경

구분		분야	등급	투입기간	비 고
비상주	당초	토질 및 기초	기술사	2015.01.27.∼2016.10.31
	변경	전기	기술사	2016.11.01.∼2017.03.26

- 건설사업관리기술자 투입시기 조정(2차 계약분)

분야	등급	투 입 시 기			비고
		당 초	변 경	증·감
토목	고급	‘16.01.01.∼’17.01.31	‘16.01.01.∼’17.01.18	감 0.41월	장안교
전기	중급	‘17.01.13.∼’17.01.31	‘16.05.10.∼’16.06.09	증 0.55월
토목	중급	‘16.01.01.∼’16.11.09	‘16.01.01.∼’16.12.14	증 1.13월	사가정길
	중급	‘16.03.21.∼’16.11.17	‘16.03.21.∼’16.12.14	증 0.87월
전기	중급	‘16.05.01∼’16.05.31 ‘16.11.01∼’16.11.30	‘16.08.01∼’16.09.09 ‘16.11.11∼’16.11.30	-
조경	중급	‘16.05.01∼’16.05.31 ‘16.11.01∼’16.11.30	-	감 2월

끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							박웅교			토목총괄과장					이동훈					토목부장					11/03 김영수
협조자				광역도로과장						진재섭
시행			토목부-22476									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-2546						/전송			3708-2599					/	pkyo2425@seoul.go.kr												/	대시민공개