문서번호	문화체육과-29628		★주무관		문화관광팀장		문화체육과장		행정관리국장	부구청장
결재일자	2016.11.3.
			안준현		임경석		김기운		고한석	11/03 하철승
공개여부	대시민공개
			협 조
보도여부
				예산팀장		전혜정
(가칭) 삼각산동 어린이도서관 도서 및 집기비품 구매예산 명시이월
2016.11.3.
강 북 구 (문화체육과)

(가칭)삼각산동 어린이도서관

도서 및 집기비품 구매예산 명시이월

(가칭)삼각산동 어린이도서관 건립과 관련하여 당초 2016년 12월 예정이던 준공이 2017년 2월말로 연기됨에 따라 도서 구매 및 집기비품 구성 일정에 차질이 발생하여 보다 알찬 어린이도서관 내부 구성을 위하여 도서 및 집기비품 구매예산을 명시이월하고자 함

Ⅰ	사업 개요

□ 사업명칭 : (가칭)삼각산동 어린이도서관 도서 및 집기비품 구매예산 명시이월

□ 사업기간 : 2013. 7월 ~ 2017. 4월

□ 사업내용 : 어린이도서관 도서구매, 전산장비 소프트웨어, 서가 및 집기구매 추진

□ 사 업 비 : 총603,620천원(구비)

○ 어린이도서관 서가 등 집기 구매 : 150,000천원

○ 전산장비 및 소프트웨어 구매 : 260,000천원

○ 도서정리용품 및 청소용품 구매 : 43,620천원

○ 도서구매 : 150,000천원

Ⅱ	추진 경위

□ 추진 일정

○ 2013.  7. 23  주민설명회 개최

○ 2014.  8. 27  2014년도 제3차 서울시 투자심사결과(조건부추진)

○ 2015. 10. 20  착공 (※ 현재 공정율 45%)

○ 2017.  2.     준공예정

Ⅲ	명시이월 내용

□ 명시이월액 : 총603,620천원(구비)

(단위 : 천원)

사업 내용	예 산 액	집 행 액	불용 예산액	명시이월내역
				적요	이월액
(가칭)삼각산동 어린이도서관 도서 및 집기비품 구매예산	603,620			도서 및 집기비품 구매	603,620
	603,620	0	-	사무관리비	43,620
				자산및물품취득비	410,000
				도서구입비	150,000

□ 예산과목

○ 문화체육과, 공공도서관확충및운영, 도서공간조성, 삼각산동어린이도서관건립,

일반운영비, 사무관리비

○ 문화체육과, 공공도서관확충및운영, 도서공간조성, 삼각산동어린이도서관건립,

자산취득비, 자산및물품취득비

○ 문화체육과, 공공도서관확충및운영, 도서공간조성, 삼각산동어린이도서관건립,

자산취득비, 도서구입비

Ⅳ	명시이월 근거 및 사유

□ 근거 : 지방재정법 제50조제1항, 서울특별시 강북구 재무회계규칙 제16조, 27조

□ 이월사유

○ 삼각산동 어린이도서관 건립이 한전 전기 수용 및 지장물 이전 지연에

따라 2016. 12월 준공예정에서 2017. 2월말 준공예정으로 연기됨에 따라

어린이도서관 도서 및 서가, 전산장비 등 집기비품 구성 일정이 건축 준공

검사 14일을 포함하여 3월 중순이후 가능하게 됨. 이에 조달물품 평균

납품기한이 한달임을 감안할때 원인행위가 2017년 1~2월이 적절하여

도서관 도서 및 서가, 비품등의 안정적인 납품 및 구성을 위하여 명시이월

하고자 함

Ⅴ	향후 계획

□ 2016.     12 : 구매 도서 선정 및 전산장비 서가 등 집기비품 발주 목록 작성

□ 2017.  1 ~ 2 : 도서구매 발주 및 서가 등 집기비품 발주 실시

□ 2017.  3 ~ 4 : 서가 및 전산장비 등 집기비품 구성 실시 및 도서 정리 실시

□ 2017.      4 : 어린이도서관 개관