투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인)

1. 업무지시현장 : 월드컵대교건설공사 주식회사포스코엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2016-11-04 08:11:34

3. 지 시 내 용 :「북단 램프-D 시점부 지반보강 실정보고 및 관급자재 규격 및 수급방법 실정보고」에 대해 검토한 바, 적정하여 붙임과 같이 승인 통보하니 지반보강 실정보고에 대해서는 향후 본부 설계변경 자문회의 결과에 따라 설계변경 시 반영하시기 바랍니다.

붙  임 : 검토보고 2부.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							심규진			토목총괄과장					11/04 이동훈
협조자
시행			토목부-22611									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2548						/전송			02-3708-2599					/	forete11@seoul.go.kr												/	대시민공개