문서번호	총무과-38262
결재일자	2016.11.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
석명오		임철수	11/04 정상택
협 조

청사 녹지대 식재 유지관리 공사 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

총 무 과

청사 녹지대 식재 유지관리 공사 설계변경 보고

’16.8월 남산2별관 철거에 따른 청사 녹지대 식재 유지관리공사

과업변경(설계변경)검토사항을 보고드림

□ 계약현황

❍ 공 사 명 : 청사 녹지대 식재 유지관리 공사

❍ 기    간 : 2016.3.21. ~ 11.15.

❍ 업 체 명 : 주식회사 한성나무종합병원 대표 주병훈

❍ 금    액 : 17,430,000원

❍ 예산과목 : 청사관리, 청사 녹지대 및 수목관리, 시설비

□ 과업내용

❍ 청사 녹지대 교목 및 관목류 시비·방제 등 유지관리 공사

- 본관 외 2개 별관: 소나무 외 25종 174주, 관목 시비 및 방제(4회)

- 남산2별관 : 소나무 외 12종 78주, 관목 350㎡ 시비 및 방제(4회)

□ 변경사유 및 금액

❍ 변경사유

- 남산2별관 건축물 철거에 따른 과업 내용변경으로 금액 조정

□ 과업변경사항 : 남산2별관 녹지대 시비 및 방제 1회 삭제

❍ 변경금액

구 분	금 액 (원)			비 고
	당 초	변 경	증 감 액
총공사비	17,430,000	16,753,000	-677,000

※ 세부내역 붙임 변경 내역서 참조

□ 보고자 의견

❍ 상기와 같이 설계변경을 시행하고, 변경 계약 체결 후 청사 녹지대 식재

유지관리 공사에 대해 준공처리 하고자 함

붙 임 : 1. 남산2청사 건축물 철거관련 공문 1부.

2. 설계변경내역서 및 합의각서 각 1부.  끝.