	서울시립과학관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울시립과학관 화장실개선공사 설계변경(준공 및 정산) 시행

서울시립과학관 화장실개선공사를 시행하고 계약금액 변동사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울시립과학관 화장실개선공사

나. 도 급 자 : **************

다. 공사기간 : 2016.10.18. ~ 2016.11. 7

라. 설계변경 내역

공종	금액		비고
	당초	변경
총공사비	21,273,840	21,551,860	증278,020
공급가액	19,339,855	19,592,600
부가세	1,933,985	1,959,260

마. 설계변경 사유

- 지하1층 남자화장실 칸막이 추가(7㎡)

- 각층 남자화장실 촉지판 설치 감소(8개→5개)

- 스텐리스배관(D20) 6m 감소 및 이음쇠(캡) 전체 감소

바. 예산과목 : 서울시립과학관 총무과, 과학기술진흥, 과학관운영 활성화, 서울시립과학관 시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

첨 부 : 1) 설계변경사유서 1부

2) 설계변경내역서 1부.

3) 설계변경 방침서 1부.  끝.

주무관	이영훈		총무과장	11/04 김호식
협조자
시행	총무과-8084	(		)	접수		(		)
우	01792	서울특별시 노원구 한글비석로160(하계동)	/
전화	970-4527	/전송	970-4597	/	dldudgns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)