문서번호	교량안전과-20096
결재일자	2016.11.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
		교량관리팀장	교량안전과장
송준섭		유제천	11/04 박문희
협조

탄천1교 정밀안전진단용역

최종보고 및 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

교량안전과

(교량관리팀)

정밀안전진단용역 최종보고 및 자문회의 결과보고

(탄천1교)

우리시에서 유지관리하고 있는 탄천1교에 대한 정밀안전진단용역 최종보고 및 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		대상시설물 현황

탄천1교(법1종)

시설물명		위 치	규격(m)		구 조 형 식	설 계 하 중	준 공 연 도	비고
			폭원	연장
탄천1교	본교	서울시 강남구 대치동 ~ 송파구 삼전동	29	322	STB	DB-24	‘90.12
	접속교		17.5	267	STB+라멘
	램프D		8.1	37	STB			R=34
	램프E		6.7	67	STB			R=231

Ⅱ		용역 현황

용 역 명 : 탄천1교 정밀안전진단 용역

계 약 자 : 백양엔지니어링㈜

계약금액 : 143,950천원

용역기간 : 2016.03.30 ~ 2016.11.24.

착수보고 : 2016.04.27.

중간보고(1차 자문회의) : 2016.09.02.

최종보고(2차 자문회의) : 2016.11.02.

Ⅲ		자문회의 현황

자문회의 장소 : 서울시청 신청사 공용회의실(8층)

자문회의 개최 : 2016.11.02(수) 11:00 ~ 12:00

자문회의 보고자 : 백양엔지니어링㈜ 사업책임기술자 차철준

자문회의 참석자 : 안전총괄본부장외 4명, 자문위원 4명

자문회의 현장사진

Ⅳ		자문 의견 및 주요 내용

진단 최초로 확인된 라멘 구조물 조사결과를 상세히 수록하고 향후 점검, 진단시 조사결과와 비교, 분석될 수 있도록 조치 바람.

바닥판은 중점유지관리 구간으로 열화 진행속도가 빠른 것으로 관측되는 바, 우선적 보수·보강을 시행하고 보다 구체적인 바닥판 보강공법제시 및 보고서 수록 요망.

교량구조에서 응답비 저하의 원인 분석과 응답비 저하에 따른 강성의 변화가 연동되어 발생한 것인지 조사된 손상과 연계하여 분석 필요.

교각 P10에서 발생한 인장균열에 대하여 보다 다양한 보수·보강 방안 추가 요망(단기, 장기방안 보고서 수록).

접속교 지장물(하수박스, 상수관로) 이력 검토 및 외관조사 추가 검토 제시.

위원별 자문의견 붙임1 참조.

Ⅴ		조치계획

자문결과에 따라 바닥판 상면 보수·보강 방안을 검토하고 보고서에 수록하고 라멘교 구간 외관 조사내용을 수록하여 차기 점검, 진단에서 비교 분석이 가능하도록 조치코자하며,

기술심의 요청 결과 기술심사담당관 내부 일정관계로 11월 말에 기술심의가 완료될 것으로 판단되어 용역 준공기한을 아래와 같이 연장코자 합니다.

- 당초 : ‘16.11.24 →’16.12.24 (추가 소요기간 30일)

붙임 : 1)자문위원 검토의견서 1부.  끝.