문서번호	도로보수과-11045
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		11/04 이규철
협 조
	주무관		이상하

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제17차)

2016.  11. 04.(금)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제17차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2016. 02. 19. ~ 2016. 12. 31.

○ 시 공 사 : 미성건설(주) 대표 김지성

○ 도 급 비 : 706,716,000원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제17차)

○ 작업위치 : 은평구 신사중앙의원 앞 외 31개소

○ 작업기간 : 2016. 09. 13. ~ 2016. 10. 30.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	94,991천원	60,925천원	감) 34,066천원
관급자재	56,012천원	36,222천원	감) 19,790천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	은평구 신사중앙의원, 북→동	24m	24m	-
2	마포구 동교로158	322m	0m	감) 322m	토목공사 지연으로 작업불가
3	마포구 와우산로(극동방송 앞)	224m	227m	증) 3m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
4	용산구 이촌로 신동아아파트 앞 교차로	721m	720m	감) 1m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
5	용산구 원효로 삼성테마트 앞 교차로	429m	0m	감) 429m	토목공사 지연으로 작업불가
6	마포구 월드컵공원관리사무소 교차로	24m	24m	-
7	마포구 상암MBC 교차로	24m	24m	-
8	용산구 이태원로 국방부 3,4번 정문	24m	24m	-
9	용산구 이태원로 국방부 1,2번정문	24m	24m	-
10	용산구 후암로 벽산빌딩 교차로 앞	48m	48m	-
11	서대문구 상수도사업본부 교차로 앞	24m	0m	감) 24m	기 작업 완료되어 작업 취소
12	마포구 대흥동 325-67 마포세무서 앞	1,686m	1,558m	감) 128m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
13	마포구 노고산동 신촌연세병원 앞	1,501m	0m	감) 1,501m	신호등 설치 불가하여 작업취소
14	은평구 진흥로 235 한국행정 연구원 앞	92m	92m	-
15	용산구 이촌로 한강고수부지 진입로	48m	0m	감) 48m	신호연동 지연으로 작업불가
16	은평구 통일로 은평뉴타운 1020동 앞	238m	242m	증) 4m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
17	서대문구 세검정로 홍제초교 앞	63m	131m	증) 68m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
18	마포구 합정역교차로(홍대방면)	34m	0m	감) 34m	자전거도로 관련 작업불가
19	용산구 서빙고로 51길 15 대한통운 앞	918m	745m	감) 173m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
20	은평구 서오릉로 역촌역~역촌사거리	2,464m	1,690m	감) 774m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
21	은평구 연서로 연신내역~불광지구대 앞	4,117m	3,693m	감) 424m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
22	마포구 월드컵북로 월드컵파크7단지~5단지	7,811m	7,364m	감) 447m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
23	서대문구 수색로 가좌삼거리~북가좌삼거리	17,210m	6,987m	감)10,223m	실 작업량 변동 및 실시설계물량 착오
24	중구 소공로 회현사거리~남산3호터널 입구	5,184m	3,934m	감) 1,250m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
25	은평구 증산동 239 증산지하차도 내	5,047m	4,787m	감) 260m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
26	용산구 효창원로 효창공원 교차로	1,951m	0m	감) 1,951m	토목공사 불가하여 작업취소
27	용산구 독서당로 유엔빌리지입구	24m	0m	감) 24m	신호연동 지연으로 작업불가
28	용산구 이태원로 이태원 119안전센터 앞	530m	586m	증) 56m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
29	용산구 이촌로 신용산초등학교 주변	835m	0m	감) 835m	토목공사 불가하여 작업취소
30	은평구 연서로 진관길 3번지	16m	25m	증) 9m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
	중구 청파로 한국경제신문사 앞(02-108)	27m	32m	증) 5m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
31	서대문구 홍제동 문화촌주유소 앞	982m	1,032m	증) 50m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
		31개	25개	감) 6m
	합 계	52,697	34,038	감) 18,659

○ 변경사유

- 실 작업량 변동에 따른 물량차이      : 15개소

- 실 작업량 변동 및 실시설계 착오     :  1개소

- 기 작업 완료되어 작업취소           :  1개소

- 토목 및 신호등공사 불가로 작업취소  :  3개소

- 토목지연 및 자전거도로관련 작업불가 :  3개소

- 신호 연동공사 지연으로 작업불가     :  2개소

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실제 작업완료분 내에서 기성준공 처리.

○ 토목 및 신호공사 지연으로 작업 불가능한 5개소는 제23차 작업지시에 포함하여 작업시행.

붙 임 : 1. 제17차 작업완료 내역서 1부.

2. 제17차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제17차 작업완료 도면 각1부(별도첨부).  끝.