투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	생태공원과장
(경유)
제목	변경계약체결 통보 - 2016년 여의도 완충숲 조성공사

1. 생태공원과-3374(2016.10.25.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약현황

공 사 명	2016년 여의도 완충숲 조성공사
계약상대자	다원환경건설(주) (대표 : 안주병)
계 약 금 액	금820,501,650원(금팔억이천오십만일천육백오십원)
계 약 일 자	2016.05.27.
공 사 기 간	2016.05.30. ~ 2016.10.26.

나. 변경내역 : 공사기간 변경(2016.05.30. ~ 2016.11.15.)

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2016.05.30. ~ 2016.10.26.	2016.05.30. ~ 2016.11.15.

다. 변경사유 : 여의도 공원 내 불꽃놀이 등 많은 행사로 인한 공사지연

붙     임 : 공사변경계약서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	주홍열		총무과장	代임재선		총무부장	11/04 이상국
협조자
시행	총무과-19468	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(7)