문서번호	정수시설과-8477
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김우승		代이해승	11/07 차윤기
협 조
	주무관			이해승

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2016년 토목·건축 시설물 유지보수공사(연간단가)공사추진 현황 보고 및 설계변경-

2016. 11.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2016년 토목·건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

공사추진 현황 보고및설계변경

우리 정수센터에서 시행하는 『토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)』와 관련하여 추진상의 사정변경 사항이 발생하여 다음과 같이 보고하며 설계변경을 시행코자함.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

공사기간 : 2016.02.29 ~ 2016.11.30

공사내용 : 콘크리트균열보수 161㎥, 단면보수 93㎥, 석축보수 99.6㎡,

표면보수 598㎡, 하수관설치 28m 등

계약업체 : 정윤산업(주) 대표 정우연,오혜옥

계약금액 : 69,227,150원

공 정 률 : 85%

Ⅱ		추진상의 문제점

활성탄흡착지 시설물에 벽체와 배수로사이에 틈새발생 및 출입문 계단등 균열

등으로 심하게 훼손되어 시설물안전관리상 보수가 절실히 요구됨(현황사진 참조)

펌프장 측구보수 등

※ 관련사진

활성탄흡착지 계단균열	활성탄흡착지 벽체틈새	활성탄흡착지 벽체틈새및균열

Ⅲ		조치의견

보수추가물량 변경 증․감 정산에 따른 설계변경 실시하여 최종 정산 조치코자 함

보수가 필요한 활성탄흡착지 시설물 틈새 및 균열등으로 심하게 훼손된 시설물을 추가로 보수조치코자 하며

추가 시공 변경물량을 우선 설계변경하여 시공조치 및 정산처리 시행코자함.

Ⅳ		행정사항

설계변경 시행

계약변경 및 정산시행

붙임 : 1) 현황 사진 1부.

2) 활성탄흡착지 시설물보수의뢰서 1부. 끝.