문서번호	시설보수과-3725
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
이원근	김재봉	11/07 강병수
협 조

제1처리장 최초침전지 보수공사 실정보고

2016. 10

난지물재생센터

[시설보수과]

제1처리장 최초침전지 보수공사 실정보고

『제1처리장 최초침전지 보수공사(1-6, 2-2, 2-8, 3-1지)』시행 중

제1처리장 최초침전지 1-7지 내 단면 벽체의 열화(콘크리트 파손)가

발견되어 보고하는 사항임.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 제1처리장 최초침전지 보수공사

❍ 공사위치 : 제1처리장 최초침전지 1-6, 2-2, 2-8, 3-1지

❍ 도 급 액 : 761,156천원

❍ 도 급 자 : 정반종합건설(주)  대표 이정아

❍ 공사기간 : 2016. 4. 27 ~ 2016. 11. 20

□ 실정보고 내용

❍ 제1처리장 최초침전지 1-7지 내측 벽체 단면 콘크리트 열화 심화

- 당초 설계시 최초침전지의 내부 상태를 확인할 수 없었으며, 「최초

침전지 슬러지 수집기 정비 계획(운영과-478호, 2016. 3.11)」에 따라

제1처리장 최초침전지 1-6, 2-2, 2-8, 3-1지에 대하여 단면보수 물량을

설계하였으나,

- 최근 제1처리장 최초침전지 1-7지 슬러지 수집기 교체작업을 위하여

물을 비우고 내부 상태를 확인한 결과 긴급 보수를 요하는 단면벽체

열화(콘크리트 파손)가 발견됨.

❍ 현황사진

□ 조치의견

❍ 당초 단면보수 대상인 제1처리장 최초침전지 1-6지는 2017년도에

보수토록 하고, 콘크리트 열화가 심한 1-7지에 대하여 금번에 단면

보수를 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

※ 제1처리장 최초침전지 단면보수 대상(1-6, 2-2, 2-8, 3-1지) 중 현재

2-2, 2-8, 3-1지는 보수완료된 상태임.  끝.