문서번호	도로보수과-5508
결재일자	2016.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
홍수종		이상호	11/07 이종엽
협조

2016년 노후포장도로 정비공사내 노면표시 보수공사(성동) 설계변경(1차) 검토 보고

2016. 11.

성동도로사업소

도로보수과

2016년 노후포장도로 정비공사내 노면표시 보수공사(성동)

설계변경(1차) 검토 보고

상반기 노후포장도로 정비공사 작업구간 변경에 따른 공종별 물량 증․감발생 및 하반기 예산 재배정 등 공사물량 증가에 따른 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

▢ 관련근거

○ 2016년 노후포장 도로정비공사 구간변경 및 측구정비 계획 보고

: 도로보수과-2709(2016.8.14.)호

○ 2016년 노후포장도로 정비공사 추가 재배정액(집행잔액 포함) 사용        및 하반기 공사계획 : 도로보수과-4916(2016.1011)호

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 노후포장도로 정비공사내 노면표시 보수공사(성동)

○ 규    모 : 차선도색 115,511m, 차로밑그림 115,511m

**********************

******************************

○ 공사기간 : 2016. 6. 28 ~ 2016. 11. 30

○ 공 정 률 : 90%

▢ 보고내용

○ 상반기 노후포장도로 정비공사 작업구간 변경에 따른 공종별 물량 증․감

○ 2016년 노후포장도로 정비공사 집행잔액 사용, 추가 예산 재배정 및 하반기 공사계획 등 추가시행에 따른 물량 증가 반영

○ 공사물량 증가로 노면표시 도료 관급자재비 증가

○ 추가 공사로 인한 준공기한 연기 필요(당초 : 2016.11.30, 변경 : 2016.12.30.)

▢ 설계변경내용

○ 주요공종 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
차선도색	도색 15㎝	m	115,511	183,418	증67,907
차로밑그림		m	115,511	183,418	증67,907

○ 변경금액

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	***********	***********	*************
도급비	***********	***********	*************
관급비	***********	***********	************
이전비	*********	*********	**********

▢ 조치계획

○ 상기와 같이 예산금액 범위내에서 공사물량 조정하여 설계 변경코자 함.

첨  부 : 1. 관련 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율검증결과 1부.  끝.