투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 수량변경(증) 구매 요청(2016년 노후포장도로 정비공사내 노면표시 보수공사용)

우리 사업소에서 시행중에 있는 『2016년 노후포장도로 정비공사내 노면표시보수공사용 특수페인트』 관급자재를 아래와 같이 수량변경(증량) 구매 및 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

◦ 요청 사항

계약건명	납품지시번호	품 명	규 격	단위	수량		납품기한		변경 사유	비고
					당초	변경	당초	변경
특수페인트 구매 (2016년 노후포장 도로 정비공사내 노면표시 보수공사)	12-16-2-35402-00	특수페인트	특수페인트,정석케미칼,JS4W-P3-R5-RW4,20㎏/포,흰색,융착식노면표지용도료	포	2,802	4,435 (증1,633)	2016. 11.30	2016. 12.30	포장도로정비구간추가로 인한 자재 증가
		특수페인트	특수페인트,정석케미칼,JS4Y-P3-R4-RW4,20㎏/포,노란색,융착식노면표지용도료	포	1,123	1,798 (증675)

끝.

	도로보수과장
주무관	홍수종		도로보수과장	11/07 이상호
협조자
시행	도로보수과-5503	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	대시민공개