등록번호	교통행정과-63895		주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설국장
등록일자	2016.11.7.
			이이용		오성채		고영자		전결 11/07 이우룡
결재일자	2016.11.7.
공개구분	대시민공개
			협조
『2016년 횡단보도 확충 정비공사』 공사실정 보고
안전건설국 (교통행정과)

『2016년 횡단보도 확충 정비공사』 공사실정 보고

우리구에서 시행하는 『2016년 횡단보도 확충 정비공사』 중 삼성본관 앞  도로중앙 중앙분리대 철거공사 구간에 벽화수가 기설치 되어 있어, 벽화수 철거가 요구되는 실정으로 철거되는 규모로 위치를 변경하여 재설치 코자 함.

※ 당초: 삼성본관 앞 ⇒ 변경: 염천교 다리)

Ⅰ		관련근거

❍ 2016년 횡단보도 확충 정비공사 시행 : 교통행정과-48643호(2016.8.24.)와 관련임.

❍ 중앙분리대 벽화수 재설치 요청 : 공원녹지과-20721호(2016.10.28.)와 관련임.

Ⅱ		사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 횡단보도 확충 정비공사

❍ 위    치 : 서울메트로 동대문별관 앞 등 8개소

❍ 사업규모

- 판석포장 330㎡, 경계석 낮춤 160m, 가로등 및 CCTV 이설 등 6개 등

❍ 추진기간 : 2016. 9. 22 ~ 12. 20(3개월)

❍ 도급업체 : ㈜준휘건설    대표  안성민

❍ 사 업 비 : 380,000천원(시비)

Ⅲ		보고내용

❍ 우리구에서 시행하는 『2016년 횡단보도 확충 정비공사』 중 삼성본관 앞 도로중앙에 설치된 중앙분리대 철거공사 구간에 벽화수(벽면

녹화 매트, 단열방근시트 등) 가 설치되어 있어,

❍ 횡단보도 설치를 위해서는 당초 기설치된 벽화수 철거가 요구되는 실정으로

❍ 철거되는 규모(약40m)로 위치 변경하여 재설치코자 함.

※ 당초: 삼성본관 앞 → 변경: 염천교 다리  (위치도 참조)

❍ 사업추진 계획

- 위  치 : 중구 의주로2가 59번지(염천교 다리 상부)

- 규  모 : 녹화매트 60㎡, 단열방근시트 60㎡, 관수라인 80m, 화분 65개

- 사업내용 : 벽화수시설 이전 설치

- 소요금액 : 30백만원

Ⅳ		향후계획

❍ 추가공사로 인하여 증가된 물량은  『2016년 횡단보도 확충 정비공사』 에

포함하여 설계변경에 반영 정산 처리코자 함.

붙임 : 위치도 및 사진 각 1부.  끝.