투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	기전설비과장
(경유)
제목	변경계약체결 통보 - 2016년 한강수중보 기전시설물 정비공사

1. 기전설비과-4218(2016.10.31.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약현황

용 역 명	2016년 한강수중보 기전시설물 정비공사
계약상대자	㈜다원이엔에스 (대표 : 장헌규)
계 약 금 액	금258,642,650원(금이억오천팔백육십사만이천육백오십원)
계 약 일 자	2016.05.10.
공 사 기 간	2016.05.10. ~ 2016.10.31.

나. 변경내역 : 금액 변경(감13,209,650원)

(단위 : 원)

변 경 내 역	변경전	변경후
금 액 변 경	258,642,650	245,433,000

다. 변경사유 : 공사물량 증감 및 추가분에 따른 변경계약

붙     임 : 공사변경계약서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	주홍열		총무과장	代임재선		총무부장	11/07 이상국
협조자
시행	총무과-19516	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(7)