투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	전면책임감리용역 변경계약 의뢰(월드컵대교 총괄11회, 8차1회)

우리 본부에서 시행 중인 「월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역」에 대한 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역

2. 용 역 비 : 9,391,690천원 (8차 : 994,900천원)

3. 용역기간 : 2010. 1. 5. ~ 2020. 9.30. (8차 :‘16. 5.23. ~‘17. 5. 1.)

4. 용 역 사 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

5. 예산과목

- 도시개발특별회계, 도로건설, 간선도로망 확충, 월드컵대교 건설,감리비

6. 설계변경 내역

- 총괄 11회, 8차 1회

(단위 : 천원)

구 분	용 역 비			용 역 기 간
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경
총괄(11회)	9,391,690	9,571,690	증)180,000	2010. 1. 5. ~ 2020. 9.30.	변경없음
8차(1회)	994,900	1,080,000	증)85,100	2016. 5.23. ~ 2017. 5. 1.	변경없음

붙  임 : 1. 설계변경 시행방침 1부

2. 설계변경 내역서 각 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	심규진		토목총괄과장	이동훈		토목부장	11/07 김영수
협조자
시행	토목부-22683	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2548	/전송	02-3708-2599	/	forete11@seoul.go.kr	/	대시민공개