의원 요구 자료 제출

시 행	주거환경개선과-12662
결재일자	2016.11.8.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		주거환경계획팀장	주거환경개선과장	주거사업기획관	도시재생본부장	결재
박준성		이종욱	박경서	김성보	11/08 진희선
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1992 번, 맹진영 의원, 기획경제위원회)

서울시 의회 맹진영 의원이 요구한 자료를 따로붙임과 같이 제출하고자 합니다.

따로붙임 :      시의원 요구자료 1부.  끝.

도시재생본부

(주거환경개선과)

맹진영 의원(기획경제위원회, 더불어민주당)

[요구번호: 1992]

❏ 동대문구 휘경동 두레주택 관련 일체자료

- 사업추진계획서

- 사업추진현황

- 지역주민 민원제기 현황

- 기타 관련자료

□ 휘경동 공동이용시설(두레주택) 신축 추진현황

❍ 사업 개요

- 위    치 : 동대문구 휘경동 294-175번지(대지면적 146㎡)

- 사업규모 : 공동이용시설(B1,1F), 다중주택 6호(2~3F)

- 입주대상 : 대학생

- 예    산 : 14.5억원(부지매입6.6억 + 건축공사비 7.9억)

❍ 추진 경위

- `13.  6월 : 두레주택 매입 및 공사대행계약(SH공사)

- `13. 12월 : 주거환경관리구역 지정 및 정비계획 결정

- `14. 11월 : 공동이용시설 부지매입 계약

- `16.  7월 : 건설공사 시공업체 선정((주)광장파트너스 종합건설)

- `16.  7월 : 착공(`17.2월 준공예정)

❍ 주요현안 및 검토결과

주요현안	검토의견	반영 여부	비고
석축제거	1. (부)출입구 설치에 따른 주민편의향상 2. 쾌적한 환경 조성(일조 및 환기)	반영	주민요구사항
암발생에 따른 공사비 증가	암발생에 따른 추가비용 불가피 주택밀집지역에 따른 무진동 공법 굴착 암발생에 따른 공사기간 연장	반영
지하2층 추가	공사비 증가에 따른 공사실효성 저조 주차대수 증가로 건축면적 감소 지반공사 추가 및 공간활용계획 수립절차로 인한 공사기간 연장	미반영	주민요구사항
건축물 레벨조정	1. 공동이용시설 이용자의 대다수가 60대 이상으로 레벨조정을 통해 진출입 용이	반영	주민요구사항

❍ 향후계획

- `16. 11월 : 휘경동 공동이용시설 설계변경 계획수립.

□ 지역주민 민원제기 현황

❍ 민원제기 현황

구분	민원인	민원일시	민원요지	처리결과
1	개인	16.9.26	- 공동이용시설 신축부지 일대 도로무단점용에 대하여 대지경계선내로 이동조치 요청 - 공사소음방지대책 - 공사안내표지판 부착	- 대지경계선 내로 물품 이동조치 - 작업시간 엄수, EGI휀스설치 - 공사안내표지판 부착완료 [SH공사 민원이첩(주거환경개선과-11101)]
2	주민공동체	16.10.31	공동이용시설 지층부분 설계변경 요청	주민의견 수렴(설계변경 반영 추진중)

끝.

작성자	기관명 (부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (주거환경개선과)	담당사무관	이종욱
	☎2133-7256	주무관	박준성
	작 성 일 : 2016.11