문서번호	시설과-8214
결재일자	2016.11.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
이경호		강민수	11/08 김재균
협조

『남산실개천 가압장 육상펌프 수리 』 수리기한 연기 검토보고

2016. 11.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『남산실개천 가압장 육상펌프 수리』

수리기한 연기 검토보고

“ 남산실개천 가압장 육상펌프 수리” 추진과 관련  펌프수리 보완 추가 사항 반영에 따른 수리기한이 부족함에 따라 부득히 아래와 같이 수리기한을 연장하고자 합니다.

수리개요

❍ 계 약 명 : 남산실개천 가압장 육상펌프 수리

❍ 계약일자 : 2016.10.27.

❍ 납품일자 : 2016.11.11.

❍ 도 급 액 : 금7,115,400원(금칠백일십일만오천사백원)

❍ 도 급 자 : 주식회사 정수플로우텍 대표 한슬기

검토사항

❍ 수리기한 연기사유

- 가압장 메카니칼 씰 교체중 고정슬리브가 마모된 사항이 발견되어 부득히 슬리브를 가공제작 구매 추가 보완 수리함으로써 불가피하게 수리기한을 연장고자 함

❍ 수리기한 연기

-  당초 : 2016. 11. 11.

-  변경 : 2016. 11. 25.

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토의견

❍ 시민들에게 쾌적한 공원환경을 제공하고자 펌프 추가 보완 수리 변경 사항이 발생되어 부득히 수리기한을 연장하여 펌프수리에 만전을 기하고자 함.  끝.