문서번호	시설보수과-6235
결재일자	2016.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	11/08 이성재
협조
	주무관		김근모

제2 비상 발전기동 보수 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제2 비상 발전기동 보수 검토보고

운영과로부터 제2 비상 발전기동 활용계획에 따른 보수요청이 있어 이에 대한 검토보고 임.(운영과-9106, 2016.11.02.)

1		시설개요

□ 시 설 명 : 제2 비상 발전기동

□ 구    조 : 철근콘크리트/슬라브조

□ 연 면 적 : 317㎡

2		활용계획

□ 수도권매립지 하수슬러지 반입이 원활하지 못하여 임시 야적장으로 활용

※ 제2 비상 발전기동 임시 케익야적장 활용계획(운영과-9036, 2016.10.31.)

3		보수요청 내용

□ 비상발전실 판넬 및 기기감지 시설(351㎡)

□ 비상발전기 기초콘크리트 철거 후 콘크리트 포장(325㎡)

□ 차량출입을 위한 높이 조정 및 셔터교체(1개소)

4		조치의견

□ 원활한 하수처리를 위하여 임시 케익야적장이 필요한 실정으로 건축시설물       (연간단가) 도급자로 하여금 우선 시공토록하고 추후 설계변경에 반영 정산      처리(증 39,860천원)

붙임 : 관련문서 1부.    끝.