투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	남산실개천 가압장 육상펌프 수리기한 연기

1. 시설과-8214(‘16.11.8)와 관련입니다.

2.『 남산실개천 가압장 육상펌프 수리 』와 관련하여 아래와 같이 수리기한을 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 남산실개천 가압장 육상펌프 수리

나. 계약금액 : 금7,115,400원(금칠백일십일만오천사백원)

다. 계 약 자 : ㈜정수플로우텍 대표 한슬기

라. 계약번호 : 2016104942800

마. 연기사유 : 남산실개천 가압장 육상펌프 수리 추진과 관련 펌프 수리 보완                              추가 반영에 따른 수리 기간이 부족함에 따라 부득히 수리기간을                             연장하고자 함

바. 연기기간 : 당초 2016.11.11,  변경 2016.11.25.

붙임 : 1. 수리기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 수리기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이경호		기전팀장	강민수		시설과장	11/08 김재균
협조자
시행	시설과-8235	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	3783-5974	/전송	3783-5969	/		/	부분공개(5)