문서번호	서울숲공원관리사무소-5941
결재일자	2016.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장
박선재	김완수	11/08 윤학수

설계변경 시행 보고

(서울숲공원 시설보수 및 생육환경 개선공사)

2016. 11

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

설계변경 시행 보고

(서울숲공원 시설보수 및 생육환경 개선공사)

우리공원에서 시행 중인「서울숲공원 시설보수 및 생육환경개선공사」에 대한 설계변경을 아래와 같이 시행코자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울숲공원 시설보수 및 생육환경개선공사

❍ 공사기간 : 2016. 09. 01~ 12. 09

❍ 도 급 액 : 214,244,000원

❍ 공사개요

- 시설물공사 : 투수블럭 포장1,074㎡, 마사토3,600㎡ 등

- 식재공사 : 스트로브잣나무 등2종 27주, 잔디식재1,920㎡ 등

❍ 도 급 자 : ㈜가림종합조경 대표 유병일

Ⅱ		변경내역

연번	내 역	공사비(천원)	비 고
1	⦁배드민턴장 주변 피압수목 정비 및 보식 - 피압목정비 4주 제거 : 증)307천원 - 결주수목보식 1주 : 증)603천원	증)910
2	⦁가족마당 현장여건(돌이 많음) 공종 변경 - 잔디통기 및 배토 (15,616㎡ → 0㎡): 감)10,695천원 - 차광막 설치(0㎡ → 1,920㎡): 증)1,027	감)9,668
3	⦁조각공원 현장여건에 따른 공종 변경 - 사고석 잔디수로 공종 변경 (175.8m → 0m):감)16,410천원 - 원주목 경계(0m→80m): 감)3,829천원 - 마사토포설(T100 → T200): 증)10,433천원 - 집수정 설치(4EA → 3EA): 감)340천원 - 연결관 설치(∅300, 64m →60m): 감)128천원 - 연결관 설치(∅200, 48.8m → 0m): 감)1,071천원	감)706
4	⦁가로변녹지대 현장여건에 따른 물량변경	증)485
5	⦁방문자센터 앞 현장여건에 따른 물량변경 - 원주목 포장철거 (T100→T300) : 증)649천원 - 포장경계석 및 철거 물량 증가 : 증)1,468천원 - 포장공 물량 변경 : 증)1,276천원	증)3,393
6	⦁중앙녹지대 현장여건에 따른 물량변경 - 그루터기 제거 (0주 → 32주): 증)917천원	증)917
7	⦁성수대교 하부 현장여건에 따른 물량변경 - 배드민턴장(라이마킹)(1 → 0): 감)1,826천원	감)1,826
8	⦁서울숲 무지개터널 주변 환경정비 - 수목정비(버즘나무24주 피압 및 고사목): 증)3,974천원 - 수목보식(스트로브 잣나무 76주 식재): 증)8,382천원 - 매쉬휀스 설치(40경간): 증)9,690천원	증)22,046
9	⦁건강보험료 등 제경비 정산	감)459
소 계		증)15,092

Ⅲ		공사비 변경 내역

❍ 공사비 증・감 내역

(단위 : 원)

구 분		소요 금액			비고
		당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비		260,823,000	275,915,000	15,092,000
도급비	소 계	214,244,000	229,336,000	15,092,000
	공급가액	194,767,273	208,487,273	13,720,000
	부가세	19,476,727	20,848,727	1,372,000
관 급 자 재 비		46,579,000	46,579,000	0

Ⅳ		조치계획

○ 현안사항 반영 설계변경 시행→계약의뢰(공원운영과)

○ 도급비 증액분(15,092천원)은 공사 낙찰차액을 활용하여 예산집행

붙  임 : 1. 공사 실정보고사항 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율 검증표 1부.  끝.