함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고[캐릭터형 아리수음수대 제작 구매 설치]

1. 급수설비과-9843(2016.11.07)호와 관련입니다.

2. 『캐릭터형 아리수음수대 제작 구매 설치』에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

가. 계 약 자 :*********: 유인수

나. 용역내용 : 캐릭터형 음수대 제작 설치

※ 음수대 디자인 : 타요버스, 라바, 슈퍼윙스, 로보카폴리

다. 계약기간 : 2016.07.13. ∼2016.11.10.

라. 변경계약 현황 : 물량 변경                        (단위 : 원)

구 분	당 초		변 경		비 고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
계약기간	‘16.07.13.∼ ’16.11.10.	616,861,000	변경없음	611,663,100	(감) 5,197,900

마. 변경사유 : 캐릭터형 아리수음수대 제작 설치시 수요가에서                                  설치 유형 변경 요청으로 물량 증감 발생

※ 수요가 : 국공립유치원, 초등학교

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경계약 방침 보고서(본부장) 1부.

3. 변경계약 방침 관련공문 1부.

4. 의결서 1부.

5. 설계 내역서 1부. 끝.

주무관	김경식		재무회계과장	박병식		요금관리부장	11/08 박병만
협조자
시행	재무회계과-16112	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(7)