투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(옥상녹화 텃밭조성공사)

1. 녹지관리과-9645(2016.10.11)호 및 -9685(2016.10.14)호와 관련입니다.

2.  옥상녹화 텃밭조성공사 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품 기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 관급자재 조달구매(옥상녹화 텃밭조성공사)

나. 연기 요청내역

건명	물품식별 번 호	품명	규격	단위	수량	단가	금액	납품기한
								당초	변경
서울쌍문초등학교 옥상녹화 텃밭조성공사	22822633	세덤매트	W300xL600	m	138	16,500	2,277,000	2016.11.16	2016.11.30
	22477828	하드우드	말라스, T30	㎡	100.3	62,700	6,288,810	2016.11.10
	22580709	야자매트	1000xT20	m	123	26,900	3,308,700	2016.11.15
성북소방서 등 3개소 옥상녹화 텃밭조성공사	22753660	야자매트	W800xT27	m	35	26,500	927,500	2016.11.15
	22705231	야자매트	W600xT20	m	27	23,000	621,000	2016.11.15
	22477828	하드우드	말라스, T3	㎡	171	62,700	10,721,700	2016.11.10

다. 연기사유 : 현재 공사 공정상 상기 자재 설치가 불가하여 공사일정에 맞게  납품기한 연기.  끝.

	녹지관리과장
주무관	이은국		주무관	박병구		녹지관리과장	11/09 김윤철
협조자
시행	녹지관리과-10730	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5948	/전송	02-3783-5949	/	jamijean@seoul.go.kr	/	대시민공개