문서번호	토목부-22972
결재일자	2016.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	11/09 김영수

임시 보행자도로 설치 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2016.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

임시 보행자도로 설치 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

샘터공원 교차로 구간 4차로 임시개통시 산지측 보도 및 고덕시영
재건축아파트 구간 도로종단인하에 따른 흙깍기 작업으로 기존
보도가 단절되어 임시 보행자도로 설치에 대하여 검토 보고 드림

관련근거

○ 교통규제심의결과 통보(서울경찰청 교통관리과-39298호, ‘13.12.27.)

○ 보행자도로 설치 실정보고(선사고덕0420-370호, ‘16.11. 1.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4 ~ 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설, ㈜청미건설

검 토

○ 샘터공원 교차로 구간 4차로 임시개통시(‘14.1월) 산지측 보도가 단절되어 임시 보행자도로 설치

○ 고덕시영재건축아파트 구간 도로종단 인하(H=8.0m)에 따라 흙깎기 작업 등을 위하여 임시 보행자도로 설치 필요

- 설치 규모

구 분	내용
샘터길 교차로	가림막휀스 + PE방호벽(무대) 320m(107경간) 잡석포설 + 인조잔디매트(폭 2m) 180m
	※ U형측구내 THP관 설치후 잡석을 채워 배수로 유지 및 보행통로 확보
고덕산 구간 (재건축아파트)	1차 : 인조잔디매트(1.2m) 445m
	2차 : 가림막휀스 267m, 인조잔디매트 328m
	1차 구간 445m 2차구간 인조잔디매트+안전로프(무대) 가림막휀스 인조잔디매트+안전로프(무대) 267m 178m 150m

○ 단가검토

- 강제협의율(90.57%) 적용

- 신규단가인 THP관 설치단가는 표준품셈에 따라 산출하였으며 단가적용 시점은 시행 시점인 2014년 하반기 단가 적용

∴ (강제)협의율(90.57%) = [설계가(100%)+낙찰율(81.143)] / 2

※ ‘계약당사자의 책임없는 사유’에 해당되는 경우 신규비목 계약단가는 계약당사자 간 협의에 의해 결정하고 협의가 이루어지지 않는 경우
공사계약일반조건 제7절 1. 나항에 의거 강제협의단가 적용

공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비고
직접공사비	1식	-	24,511	24,511
제 경 비	1식	-	2,579	2,579
공사원가	1식	-	27,090	27,090
부가가치세	1식	-	2,709	2,709
도급공사비	1식	-	29,799	29,799
관급자재	1식	-	-	-
총공사비	1식	-	29,799	29,799

감리단 검토의견

○ 2014. 1월 4차로 임시개통시 샘터공원 교차로 구간은 보행자통로가 단절되어 교통규제심의 계획에 따라 보행자 통로 설치와 고덕산구간 교통전환 및 도로종단 인하에 따른 토공 깍기 작업 등으로 보행통로 확보를 위하여 보행자 도로를 설치한 사항은 타당하다고 사료됨.

※ 본 실정보고는 ‘공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 5. 발주기관의 필요에 의한 설계변경’을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 서류 검토결과 내역서, 수량산출서, 단가산출서, 도면 등이 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성되었음.

조치계획

○ 보행자 도로 단절에 따른 임시 보행자 도로 설치 반영을 위하여 실정보고하는 사항에 대하여 감리단 검토의견과 같이 반영이 필요하며,

○ 증액되는 공사비 29,799천원에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.