			중부수도사업소
수신자		급수운영과장
(경유)
제목	용역 변경계약 체결 보고(통보)[2016년 한남배수지외 4개소 항청소 용역]

1. 급수운영과-25247(2016.11.8.)호와 관련입니다.

2.『2016년 한남배수지외 4개소 항청소 용역』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 보고(통보)합니다.

가. 계약건명 : 2016년 한남배수지외 4개소 항청소 용역

나. 계약업체 : *********************************

*******************************************************

다. 계약금액

- 당초 : 금75,717,000원

- 변경 : 금77,110,000원

- 증액 : 금1,393,000원

라. 계약기간 : 변경없음(2016.04.21.~12.31.)

마. 변경사유 : 남산1,3지 항청소 추가작업으로 인한 청소면적 증가 등

바. 보증서 관련사항

- 계약보증서 : 증액분(금1,393,000원)에 대한 추가보증서 징구

- 선금보증서 : 해당없음

붙임 : 변경계약서 및 합의서 등 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	은정호		행정관리팀장	代은정호		행정지원과장	서경만		중부수도사업소장	11/09 代서경만
협조자
시행	행정지원과-28556	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	3146-2043	/전송	3146-2244	/	younieun@seoul.go.kr	/	부분공개(7)