투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(양천향교역 주변 교통신호기 설치 및 이설 공사)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대방건설주식회사 마곡B7-3,4BL 제16-75(2016.10.31.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 양천향교역 주변 교통신호기 설치 및 이설공사

나. 공사장소 : 강서구 양천향교역 교차로 주변

[T-GIS교차로명 : 가양사거리]

다. 원 인 자 : 대방디엠시티(주)

라. 감 리 사 : ㈜영호이앤씨

마. 시 공 사 : ㈜한신이티씨

바. 변경내용 및 요청 : 공사기간 변경에 따른 준공기한 연장

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	승인통지일 ~ 2016.10.31.	승인통지일 ~ 2016.12.31.	61일 증

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	대방건설주식회사,(주)한신이티씨
주무관	장종창		기전과장	11/09 박재경
협조자
시행	기전과-14669	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/	jcjang@seoul.go.kr	/	대시민공개